	『남산골 한옥마을』전통가옥 전기증설공사 제 안 요 청 서

2014. 12.

남산골 한옥마을

METAA PUBLIC(남산)

	목 차
Ⅰ. 공사개요 1. 공사내용 1 2. 추진체계 2 3. 추진일정 2 Ⅱ. 제안요청사항 1. 주요 공사범위 2 2. 제안 요청사항 3 3. 제안 일반사항 6 Ⅲ. 시행절차 1. 협상대상자선정 절차 9 Ⅳ. 제안서 및 입찰등록서류 제출 1. 모집공고 10 2. 제안서 세부평가 항목 및 배점기준 12 3. 제안서 효력 14 4. 행정 일반사항 14 5. 기타 14

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공사내용

□ 공 사 명 : 남산골 한옥마을 전통가옥 전기증설 공사

□ 공사기간 : 계약체결일로부터 2015. 2. 28

□ 공사현장 : 서울특별시 중구 퇴계로 34길 28 남산골 한옥마을

□ 공사목적 : 공연, 전시, 체험 등 한옥의 활용도를 높이고 노후화된 전기 시설의 개보수를 통해 화재 및 관람객 안전사고 방지

□ 공사내용

- 주공종 : 전기증설공사(기존67KW→증설63KW, 최대허용전력130KW 이상)

- 공사범위 : 한옥마을 내 전통가옥 전역 (연면적:7,934㎡)

□ 공사대상

- 민씨가옥, 윤씨가옥, 윤택영재실, 이승업가옥, 김춘영가옥, 전통공예관, 관리사무실, 옥외 전기시설

- 메인분전함 및 가옥별 분전반교체, 가옥간선 전량교체(배관/배선), 인입커버설치, 가옥별 기구(콘센트) 교체 및 신설, 외부행사용 아울렛 설치

□ 발 주 처 : 서울특별시(문화정책과) / METAA PUBLIC(남산)

□ 추진체계

□ 입찰방법 : 제안입찰(입찰서류와 가격제안서)

□ 계약방법 : 협상에 의한 계약체결

□ 추진절차 : 현장설명→입찰제안서제출→우선협상대상자선정→실시설계→계약

※ 협상에 의한 계약 체결로 제안서 검토 후 협상대상자 선정 및 개별통보

□ 추진일정

□ ~12월 1주 : 공사 입찰공고(공고기간 7일), 현장설명 포함

□ ~12월 2주 : 입찰서 제출, 우선협상대상자 선정

□ ~12월 4주 : 실시설계, 계약체결

□ ~ 1월 1주 : 서울시 문화재위원회 협의

□ ~ 1월 2주 : 착공

Ⅱ		제안 요청사항

□ 공사범위

□ 전기증설 계획 및 도면작성(세부공사계획 수립, 시공도면 작성 등)

□ 전통가옥의 전반적인 전기시설 개선(신설) / 가옥별 필요량 반영

- 전기증설(67KW→130KW이상), 메인분전함 및 가옥별 분전반 교체

- 가옥별 간선, 전등용·전열용 배관·배선 전량 교체, 벽체노출배선 교체

- 기구(콘센트, 스위치 등) 교체, 인입커버 설치

- 외부 행사용 아울렛 분전반 설치(발주처 협의, 약 10개소 이상)

※ 발주처의 사정에 의하여 공사규모가 조정될 수 있음

※ 제안자가 상기내용을 참고하여 일부 조정 제안할 수 있음

※ 공사 시 관광지 특성을 고려하여 시설운영 및 관광객 관람에 지장이 없어야 함 [공사 완료일(예정) : 2015.02.28.]

□ 세부 제안 요청사항

□ 전통가옥의 전기시설 일체 개선(증설, 67KW→130KW이상)

※ 아래 내용은 모두 본 공사의 공사계획서에 포함하여 제안 요망

1) 친환경 및 KS규격에 맞는 자재를 이용한 전기증설공사 제시

2) 문화재(관광지)의 특성을 고려한 적정한 시공법 제시

(가옥별 기존 기구위치 활용 및 신규설치 시공방법 등)

3) 전기공사 감리자 선임 계획 제시

4) 계약일로부터 2015.2.28.까지 준공을 목표로 한 예정공정표 제시

□ 세부공사계획 수립 및 시공도면 작성(낙찰자 결정 후 제출)

※ 아래 내용은 모두 본 공사의 계약에 포함하여 제출 요망

1) 남산골 한옥마을 관광지 환경에 부합되는 전기증설 계획

2) 관광객의 안전이 확보될 수 있는 안전시설 및 가설전기 설치계획 제시

3) 해당 시설의 기존 전기 및 비관련시설의 훼손으로 인한 복원 방법 제시

4) 제안자는 사용자재를 제시하고, 계약시 즉시 제안서에 근거하여 7일 내에 각 공정별 자재를 현장에 입고시키고 승인을 득하여야 함(선급금 조건)

5) 세부 공사계획 및 시공도면 작성, 단계별 공사일정 등 종합공사계획안 수립

6) 공연, 전시, 체험 등 한옥 활용에 필요한 전기 제반시설을 확충하고 화재 및 안전사고를 방지할 수 있도록 최적의 공사방안을 마련하고 실시설계에 반영

□ 사업시행 요청사항

1) 법규에 의한 시행

- 본 과업상 필요한 법규는 정부가 제정, 공포한 관계법규 및 계약규정에 준하여 시행하여야 함

2) 발주자측의 승인

- 계약자는 계약체결 후, 공사이행 전에 과업이행을 위한 착수계 및 실시설계를 제출하여 발주기관의 승인을 받은 후 공사를 진행함

- 승인용 자료 제출은 5부씩 제출

(실시설계도면과 승인도면, 공사계획서 및 공정표, KS자재품목 등)

3) 결정권

- 발주처와 계약자가 해석상 상이한 의견을 가졌을 경우 양자간에 협의하여 결정하되 결정권은 발주처에 있음

4) 명시되지 않은 사항

- 명시되어 있지 않은 사항이라도 동 사업추진과 관계되는 사항은 상호 협의 후 발주처의 지시에 따라 수행하여야 함

5) 승인

- 본 공사이행 완료시에는 준공계를 작성하여 준공검사를 거쳐야 하며, 기술상의 오류, 하자발생 요인의 발견, 공사내용의 과오 등 결함에 대하여서는 반드시 시공사의 부담으로 보완조치 하여야 함

6) 공사이행계획

- 계약 후 본 관업이행 전 추진조직, 일정 등을 상세히 기록하여 발주처에 제출하되 상호협의 하에 계획을 수립하여야 함

7) 공사기간의 연장

- 천재지변 등의 불가항력으로 인해 공사이행에 지장이 생겼거나, 발주처 및 관련기관의 정책변경 혹은 세부사업내용 변경이나 기타 불가피한 사유로 인해 변경내용을 발주처가 승인할 때만 허용

8) 공사이행조직 및 장소

- 공사이행자 명단을 제출하고 총괄관리자, 각 분야별 관리자는 공사경험과 전문지식이 풍부한 자로 하여야 함

- 공사에 참여하는 수행자는 충분한 기술과 경험을 가진 자라야 하며, 공사를 수행함에 있어 발주처가 부적당하다고 판단하거나 태만하다고 판단하는 자에 대하여는 교체를 요구할 수 있음

- 공사에 참여한 전문 인력은 임의로 교체할 수 없으며 불가피한 사유가 발생하였을 경우는 발주처와 협의하여야 함

- 공사를 수행함에 있어 필요한 경우 분야별 전문가와 합동점검을 할 수 있으며, 다양한 의견수렴을 위해서 자문회 등을 발주처와 협의하여 개최할 수 있음

- 원활한 공사이행을 위하여 시공자는 발주처의 요구가 있을 경우 지정한 장소에 상근인력을 투입하여 공사를 추진하여야 함

9) 품질보증 활동

- 시공사는 결과물의 품질향상을 위하여 프로젝트가 진행되는 동안 지속적으로 품질관리 및 보증활동을 수행하여야 하며, 그 활동내용 및 결과를 공사종료 시 서면보고를 하여야 함(하자보수이행증권 등)

- 시공사는 계약 직후, 공사이행보증증권을 제출하여 승인을 득하여야 함

10) 기타

- 본 공사를 이행하면서 필요한 제반사항은 관련법률 등을 종합 검토하여 발주처와 사업가 간 상호 협의하여 처리함

- 본 공사 이행 중 사업조정 등으로 인하여 추가로 발생하는 항복 등에 대해서는 제안요청서에 명시되지 않더라도 사업목적 달성을 위하여 반드시 수행하여야 함

- 사업 추진 계획의 변경으로 본 제안요청서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우에도 시공사는 이의를 제기하지 못함

- 발주처는 필요에 따라 추가제안 또는 자료를 요청할 수 있으며 이에 따라 제출된 자료는 제안요청서와 동일한 효력을 가짐

- 본 공사계약자는 공사 중 일어나는 민형사상의 모든 책임과 안전관리 책임을 져야 함. 만일 시공 중 발주처에 손해를 입혔을 때는 배상하여야 함

- 본 공사계약자는 시공 전에 세부 시공도를 승인받아야 하고, 모든 자재는 KS 제품사용을 의무적으로 하여야 함

- 본 공사는 제안요청서 및 계약내용에 따라 성실히 수행하여야 함

- 본 공사는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 예산, 회계 등 관련 법규와 제반 계약내용을 준수하여야 함

- 공사이행 중 용어는 일반적인 통념에 따라 해석하되 제반규정과 용어 등의 해석에 의견을 달리할 경우에는 발주처의 해석에 따름

□ 제안 일반사항

□ 입찰참가자격

1) 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제13조 및 동법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 업체

2) 『전기공사업법』 제4조에 의거 각 항복의 조건을 충족시킬 수 있으며 서울특별시 내에 전기공사업 등록(면허) 및 사업장 소재지가 있는 업체

3) 『전기공사업법』 제5조(결격사유) 및 동법 시행규칙 제6조(영업정지처분 등)에 해당하지 않는 업체

4) 법인설립 3년 이상, 자본금 2억 이상의 최근 3년 이내 실적 20억 이상, 단일 공사 4억 이상의 시공실적이 있는 업체

5) 상기 자격을 갖춘 업체로 반드시 현장설명에 참가한 업체

□ 입찰보증금 납부

1) 입찰보증금의 납부는 면제하며, 입찰금액이 100분의 5이상에 상당하는 입찰보증금 납부 확약 내용이 명시된 입찰참가신청서를 제출해야 함

2) 입찰보증금에 대하여는 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제37조의 규정에 의함

□ 계약자 선정방법

1) 계약방법 : 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제43조

2) 적용규정 : 협상에 의한 계약체결

3) 협상방법

- 협상대상자 선정 : 협상순서는 협상적격자의 기술능력평가 점수와 가격 평가점수를 합산하여 합산점수의 고득점순에 따라 결정한다. 다만, 합산 점수가 동일 한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부 평가항목 중 배점이 큰 항목의 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 한다.

- 협상범위 : 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용과 심사위원회에서 권유한 사항을 대상으로 협상을 실시하며 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다.

- 가격협상 : 협상대상자와의 가격협상 시 기준가격은 당해 사업예산 이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 한다. 또한, 협상대상자가 제안한 내용을 가감하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 당해 사업예산 범위 내에서 조정할 수 있다.

- 협상순서 : 협상적격자로 선정된 자에 대해 협상순위와 협상일정을 통보하고 미 선정자는 통보를 생략한다. 또한, 협상순위에 따라 협상하며, 상위 순위자와 협상이 성립되면 하위 순위자와 협상은 생략한다.

4) 계약체결 : 협상성립 후 7일 이내 계약 체결

□ 하자기간 : 하자보수 기간은 공사 준공일로부터 2년으로 한다.

□ 기술지침

1) 적용범위

- 본 설명서는 발주처와 제안자 간에 남산골 한옥마을 전통가옥 전기증설공사에 필요한 제반 사항 중 특기사항을 규정함

- 본 설명서는 전기설비 시설에 필요한 최소한의 요구 사항이며 본 설명서에 명기되지 않은 사항에 대하여는 다음의 법령 및 규정을 충족하여야 함

․ 전기공사업법령

․ 전기설비기술기준

․ 산업표준화법에 의한 한국산업규격(KS)

2) 일반사항

- 공사계약에 관한 사항은 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』의 규정에 준함

- 제안자는 본 제안서에 대하여 평가위원 구성, 평가기준, 평가방법 및 결과에 대하여 일체의 이의를 제기하지 못함

- 계산 착오로 인하여 계약금액이 과다 책정되었을 경우 추가금액에 대하여 감액조치함

- 낙찰업체로 선정된 자는 공모제안서에서 제안한 자재 및 공법에 대하여 책임을 다하여야 하며, 임의로 자재 및 공법을 변경하지 못함. 다만, 현장 적용상 자재 및 공법의 변경이 불가피할 경우 본 기관 감독관의 승인을 득하여야 하며, 이때 도급금액의 증액이 발생할 경우 도급자 부담으로 하며, 감액이 발생할 경우 감액조치함

3) 특기사항

- 본 기관에서 제시한 가설계(계획) 도면을 참고하여 실시설계를 하되, 본 건축물의 훼손을 최소화하는 적정한 시공법을 채택하여 공사가 진행되어야 하며, 특히 용도 및 한옥특성에 부합되어야 함

- 시공자는 기존 건물에 대하여 제반사항을 충분히 조사하여 제안서를 작성하여야 함

- 자재 및 공법은 시공자의 판단(시공경험, 시공기술, 현장상태 등)에 따라 결정하되, 자재는 한국산업규격에 합격한 제품 또는 동등한 상품을 사용하여야 함

- 제안한 자재 및 공법에 대하여 제안서에 자재 선정 사유 및 공법에 대한 특징 등을 기술하고 필요할 경우 자재의 품질시험성적표를 첨부하여야 함

- 설명서는 일반사항 및 특기사항을 구분하여 작성하되 자재의 품질 및 규격, 공법, 사후관리 계획에 대하여 상세히 기술하여야 함

- 도면과 설명서의 내용이 상이할 경우 본 기관 감독관의 판단에 의하여 적용의 우선순위를 결정함

- 공사 착수 전에 시공자는 전체적인 기능을 알 수 있는 최종 시공도면 및 각종 자재의 품목을 제출하여 재질, 색상, 규격, 마감 등에 대하여 본 기관 감독관의 승인을 득한 후 시공하여야 함

- 공사 착수 전에 도급자는 공정표를 작성하여 본 기관 감독관과 사전 협의한 후 작업 계획서를 작성하여 승은을 득하되, 시공 중 도면변경이나 공사지연 등의 사유가 발생하는 경우에는 지체 없이 본 기관 감독관과 상의하여 대책을 강구하여야 함

- 사업제안에 참가하고자하는 업체는 본 기관에서 제시하는 제안요청서 및 관련법령 숙지하여야 하며, 미숙지로 인한 책임은 업체에 있음

- 제출서류는 일체 반환하지 않으며, 소요비용은 제안자 부담으로 하고 낙찰탈락자에게는 제안서 작성비를 보상하지 않음

- 참가업체는 평가결과에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없으며, 평가결과 및 세부내역은 일체 공개하지 않음

- 제안서에 필요한 자료는 요청 시 열람 가능함

Ⅲ		시 행 절 차

□ 협상대상자선정 절차

제안자 모집공고 (입찰공고)		▫ 사업내용, 사업자선정, 제안요청 등 안내 ▫ 남산골한옥마을 및 운영사 홈페이지 ▫ 일정 : 2014년 12월 10일(수)
현장설명회 및 입찰참가 신청		▫ 현장설명회 개최 ▫ 남산골 한옥마을 국악당 B1F 회의실 ▫ 문의 : 운영실 (02-2261-0517) ▫ 일정 : 2014년 12월 12일(금) 14:00
제안서 접수		▫ 제출처 : 남산골 한옥마을 운영실 ▫ 일정 : 2014년 12월 16일(화) 14:00
제안서 평가 (협상적격자 선정)		▫ 심사위원회 개최, 제안서 평가 ▫ 개찰 : 2014년 12월 16일(화) 18:00 ▫ 우선협상대상자 통보 : 2014년 12월 17일(수)
협상 및 실시설계		▫ 협상 : 총 공사금액 및 실시설계 등 협상 ▫ 설계 : 대상자 통보 후 2주 이내 제출
계약 및 공사착공/준공		▫ 계약 : 협상 후 7일 이내 계약 ▫ 공사기간 : 60일 이내

※ 상기 일정은 상황에 따라 변동될 수 있음

Ⅳ		제안서 및 입찰등록서류 제출

□ 모집공고

□ 모집공고

1) 일자 : 2014년 12월 10일(수)

2) 게재 : 남산골한옥마을 (http://hanokmaeul.seoul.go.kr/) 공고란 게시

□ 제안요청 현장설명회 및 참가자 등록

1) 일자 : 2014년 12월 12일(금) 14:00~15:00

2) 장소 : 남산골 한옥마을, 남산국악당 B1F 회의실

3) 제안요청 설명회 후 현장 이동하여 현장설명회 예정

4) 현장설명회 참석업체에 한하여 제안서 제출자격 부여함

5) 현장설명 시 설계도서(가설계), 내역서 산출에 필요한 자료를 열람, 배포 예정

※ 문의 : 남산골 한옥마을 METAA PUBLIC(남산) 운영실 (☏02-2261-0517)

□ 제안서 제출 및 접수

1) 접수기한 : 2014년 12월 15일(월) 14:00까지

2) 접수장소 : 남산골 한옥마을 방문접수(우편, 이메일 접수불가)

3) 문 의 처 : 남산골 한옥마을 운영실 김정호 (☏ 02-2261-0517)

4) 제출서류

① 입찰참가신청서 ‘인감날인’ 1부 - 서식1호

② 기술제안서 – 서식2호 (서식2-1호~2-4호 모두 작성, 제출)

③ 가격제안서 – 서식3호 (서식3-1호)

④ 공사계획서 – 서식4호

⑤ 입찰서약서 – 서식5호

⑥ 근로자권리보호이행서약서 – 서식6호

⑦ 청렴계약 이행각서 - 서식7호

⑧ 사업자등록증 사본 1부(원본대조필 명기 후 인감날인)

⑨ 법인 등기부등본 및 인감증명서 각1부(최근3개월 이내)

⑩ 인감도장(사용인감계 사용시 사용인감계 별도제출) 지참

⑪ 국세 및 지방세 납세필증 사본 1부

⑫ 평가배점표에 따른 제출서류

- 법정 기술자 보유현황 및 업체현황(협회발급) 1부

- 실적증명원(협회발급) 1부

- 제재처분확인서(협회발급) 1부

⑬ 그 밖에 입찰에 필요한 서류

- 회사소개서

- 대표자가 아닌 경우 재직증명서와 위임장 소지(신분증 지참)

- 입찰참가신청서 제출 시에는 본 기관이 제시하는 물량에 단가를 적용한 총 공사비 산출 내역서 1식을 반드시 함께 제출하여야 함

※ 필요시 추가서류 요청할 수 있음.

※ 제출될 모든 제반증빙서류는 공고문 또는 본 제안요청서에 별도 표기하지 않는 한, 최초공고일자(2014.12.09) 이후 날짜에 발급된 것만 유효한 것으로 간주됨.

※ 협상대상자 선정 후 실시설계 도면 5부, 원본 5부(업체명 표기), CD 2장 제출

□ 기타 유의사항

- 현장설명회에 참가한 업체에 한하여 제안서 제출이 가능함

- 제안서(가격)는 공식문서로 제출하여야 하며 반드시 대표자의 인감을 날인할 것

- 제안된 서류는 반환하지 않으며 관련한 일체의 비용은 제안사가 부담

- 제안서 접수 후 추가 자료나 설명회는 발주자의 필요에 따라 요청할 수 있음

- 본 제안서 내용의 해석과 관련한 최종적인 결정권은 발주처에 있음

- 제안서의 기재내용은 발주처의 요청이 없는 한 수정, 삭제, 대체할 수 없음

- 입찰에 참가하고자 하는 자는 발주처가 제시한 제안요청서 내용을 숙지하여야 하며 숙지하지 못한 책임은 제안자에 있음

□ 심사

- 심사위원회 : 외부인사를 포함한 심사위원회 구성

- 심사방법 : 제출된 구비서류를 위원회를 통해 검토 및 평가

- 유의사항 : 참가업체는 평가결과에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없으며, 평가결과 및 세부내역은 일체 공개하지 않음

□ 제안서 평가항목 및 배점기준

□ 평가항목 및 배점기준

구 분	평 가 항 목	배 점	비고
계		100
기술평가	∘기술인력 보유상태	10	전문인력투입현황 증빙자료
	∘신인도	10	제재처분확인서
	∘전기공사 시공 수행실적	10	실적증명서
역량평가	∘공사계획의 적정성	10	심사위원 평가
	∘현장 이해도	10	심사위원 평가
가격평가	∘입찰가격서 평가	50

□ 제안서 평가기준 총괄

- 제안자는 제안요청서를 충분히 숙지하고 이를 준수하여 작성함

- 모든 제출서류에는 어떠한 암호나 기호를 표기하여서는 안 되며, 이를 반할 경우 평가대상에서 제외됨

- 제출 서류의 작성은 지정 서식에 따라서 작성함

- 제안서 제출 후에는 내용을 수정, 보완, 변경이 불가함

- 기술제안서는 제안자의 사업수행실적과 능력 및 본 사업에 참여할 자에 대하여 객관적 평가를 위해 제출되어야 하는 서류임

□ 기술제안서 (객관적 평가자료)

- 제안서의 작성요령과 서식은 입찰공고 제안요청서의 제안서 작성안내 및 각종서식 란에서 다운받아 사용(A4용지 크기로 작성)

- 기술제안의 표지 및 각 별지 서식은 원본을 유지함

- 별지 제2호, 3호 서식의 등록번호는 입찰참가자 등록번호로 공란으로 비워둠

- 실적인정기준은 다음과 같음

① 한국전기기술인협회에서 승인된 사항만을 인정한다.

② 실적증명서는 원본 제출하여야 한다.

③ 위의 기준으로 제출하지 않은 실적은 평가 시 실적 인정하지 않는다.

□ 사업비 산출 및 가격제안서 작성

- 별지 서식의 가격제안서를 작성하여 밀봉 및 봉인하여 제출

□ 인쇄 및 제본요령

- 모든 제출서류는 한글로 작성

- 제 본 : 좌철(A4용지)

- 기 타 : 표지, 목차, 첨부서류를 제외하고 단면으로 쪽 구분을 표시

※ 상기 사항으로 제안서를 작성하여야 하고, 임의작성 또는 상기 사항으로 작성하지 않을 경우 평가 시 감점요인이 될 수 있음.

□ 제안서 효력

□ 제안서의 내용은 협상대상자 선정이 완료되면 계약서에 명기되어 있지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 단, 계약서에 명시된 경우에는 계약서 사항이 우선함

□ 제안서 및 계약서에 대하여 해석상의 이견이 발생할 경우는 발주처의 견해가 우선함

□ 제안서의 내용이 향후 사업 추진 시 반드시 필요하다고 인정될 경우에는 발주처의 요청에 의해 수정이 가능함

□ 발주처의 요청 시 관련된 자료를 추가로 제출할 수 있으며, 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력 발생

□ 제안서의 보안

- 본 제안요청서의 전체 또는 일부가 제안서 제출이외의 다른 목적으로 사용되어서는 안 됨. 선정된 업체는 제안요청기관의 보안요청을 준수할 것에 동의해야 하며, 본 사업의 수주경쟁에 참여함으로써 업체가 획득한 정보는 제안요청기관의 서면에 의한 승인 없이는 외부에 누설되어서는 안 됨

□ 행정 일반사항

□ 제안서 작성비용 : 제안서 작성에 소요되는 비용은 제안사가 부담하며, 제출된 제안서는 일체 반납하지 않음

□ 상기 제안요청서에 기술되지 않았어도 본 사업을 추진하는데 있어 필수적이라고 판단되는 사항은 제안 범위에 포함하여 제안함

□ 기타

□ 입찰의 무효

- 제안서의 내용이 사실과 다른 경우

- 입찰참여 자격이 없는 자가 제안서를 제출한 경우

- 낙찰자가 소정의 기일 내에 계약을 체결하지 않을 경우

- 동일사항에 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 입찰

□ 비밀유지의 의무

- 입찰자는 배부 받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용하여서는 아니 됨

□ 관계규정․법령 등의 숙지

- 입찰에 참가하고자 하는 자는 본 입찰유의서 및 지방자지단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등을 입찰 전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못하여 발생되는 책임은 입찰 참가자에게 있음

□ 계약체결 관련 유의사항

- 낙찰자는 계약에 응하여야 하며, 특정사유 없이 계약을 체결하지 않거나, 계약조건 불이행시 부정당업자로 입찰참가 자격제한을 받을 수 있음

[별지 제1호 서식]

입 찰 참 가 신 청 서 ※ 아래사항중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.						처 리 기 간
						즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
입찰개요	입 찰 공 고 (지명) 번호	제 호		입 찰 일 자	∙ ∙ ∙
	입 찰 건 명
입찰보증금	납 부	∙보증금율 : % ∙보 증 액 : 금 원정(￦ ) ∙보증금납부방법 : 납부면제
	납부면제 및 지급확약	∙사유 : ∙본인은 낙찰 후 계약 未체결시 귀 원에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대 리 인 ∙ 사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 주민등록번호		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고한 귀원의 협상에 의한 계약 경쟁 입찰에 참가하고자 귀원에서 정한 공사 입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. ※ 붙임서류 : 공고문에 게시한 서류일체 신 청 인 (인) 메타퍼블릭(남산) 총감독 귀하

[별지 제2호 서식]

등록번호

남산골 한옥마을 전통가옥 전기증설 공사

기 술 제 안 서

참 여 업 체 명

[별지 제2-1호 서식]

제안회사 연혁 및 일반현황

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
회사설립년도
해당부문종사기간	년 월 ~ 년 월( 년 개월)
- 주요 연혁

※ 입찰참가 자격의 각목을 모두 갖춘 업체 : 참가자격을 증명할 수 있는 등록증사본 첨부

[별지 제2-2호 서식]

공사이행 인력 투입계획서

			책임기술자
			소속, 직위	성명
설계부문 책임자						공사부분 책임자
소속, 직위	성명					소속, 직위	성명

□ 참여기술자 요약(책임기술자, 부문별 책임기술자, 참여기술자 순으로 작성),

연 번	성 명	생 년 월 일	본 과 업 참 여 임 무	최 종 학 교 (학 위)	기 술 자 등 급	자격증	경 력	소 속

※ 근무경력은 공고일 전일현재 기준으로 년, 월까지 기재

[별지 제2-3호 서식]

전기공사 사업의 수행실적

사 업 명	사업기간	실적면적(㎡)	발주처	발주부서	비 고

[별지 제2-4호 서식]

실 적 증 명 서

신 청 인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처		남산골 한옥마을
	증명서용도		『남산골 한옥마을 전통가옥 전기증설공사』실적 증명용
	공사의 규모		* 실적면적(㎡)을 기재바랍니다
공사 실적내용 (하도급 실적포함)	공사명
	총 금액(원)		(￦ )
	계약 번호	계약 일자	사업기간		이행실적		비 고
					비율(%)	면적(㎡)
							반드시 면적을 기재바람
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2011년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급부서 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

[별지 제3호 서식]

등록번호

남산골 한옥마을 전통가옥 전기증설 공사

가 격 입 찰 서

참 여 업 체 명

[별지 제3-1호 서식]

『남산골 한옥마을 전통가옥 전기증설 공사』

가 격 입 찰 서

사 업 명	『남산골 한옥마을 전통가옥 전기증설 공사』
제 안 자
사업기간
제안금액	일금 원(￦ )
○ 붙임 : 금액 산출내역서(공사금액+설계비용 등 부가세 포함) 상기 금액으로 가격입찰서를 제출 합니다 2011년 월 일 제안자 : (인) 메타퍼블릭(남산) 총감독 귀하

※ 금액은 부가세를 포함하여 작성

※ 가격입찰서는 반드시 밀봉하여 제출

[별지 제4호 서식]

등록번호

남산골 한옥마을 전통가옥 전기증설 공사

공 사 계 획 서

참 여 업 체 명

[별지 제4-1호 서식]

공 사 계 획 서

※ 아래 내용을 중심으로 자유롭게 기술, 5장 내외

1) 친환경 및 KS규격에 맞는 자재를 이용한 전기증설공사 제시

2) 문화재(관광지)의 특성을 고려한 적정한 시공법 제시

(가옥별 기존 기구위치 활용 및 신규설치 시공방법 등)

3) 전기공사 감리자 선임 계획 제시

4) 계약일로부터 2015.2.28.까지 준공을 목표로 한 예정공정표 제시

[별지 제5호 서식]

서 약 서
제안자	상호 또는 법인명칭		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		주민등록번호
본인은 귀 기관에서 시행하는“남산골 한옥마을 전통가옥 전기증설 공사” 공모에 제안서를 제출함에 있어 본 제안과 관련된 제반사항을 반드시 준수하고 보안유지에 최선을 다할 것이며, 본 건 제안공모 적격심의와 관련하여 어떠한 민원도 제기하지 않겠습니다. 만일 이를 소홀이하여 발생되는 모든 제반사항에 대하여 귀원의 어떤 조치에도 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다. 2014년 월 일 서 약 자 인 (사용인감) 메타퍼블릭(남산) 총감독 귀하

[별지 제6호 서식]

근로자 권리보호 이행 서약서

당사는 남산골 한옥마을에서 시행하는 전통가옥 전기증설공사 계약업체로서 근로자(하도급 업체 포함)의 인권보호․고용안정․노동환경 등의 권리보호를 위해 다음사항을 이행할 것을 서약합니다.

당사는 근로자가 인간으로서의 존엄과 가치 및 자유와 권리를 누릴 수 있도록 인권보호를 위한 경영정책(관련 법령에 의거 취업규칙 작성·신고 등)을 확립하도록 노력하겠습니다.

근로자에 대하여 인종 ․ 종교 ․ 신체적 결함 ․ 성별 ․ 출생지 ․ 노동조합 가입여부 등의 이유로 고용·보상·훈련의 기회, 승진, 이직, 퇴직 등에 차별을 하거나 차별을 조장하지 않겠습니다.

산업에 대한 효과적인 지식을 소유하고 근로자의 노동환경을 개선하고, 작업과 관련한 사고나 질병을 예방하기 위해 적절한 조치를 취하며 특히, 근로자가 건강과 안전이 위험하다고 판단하여 작업을 거부한 경우 즉시 현장의 문제를 조사하여 조치를 취하도록 하겠습니다.

근로자에게 노동력 착취적인 언어 ․ 신체적 접촉과 성적 강압 등과 같은 행위, 정신적 강압이나 언어폭력 등은 허용하지 않고, 근로자의 개인정보나 사생활에 대한 권리를 존중하겠습니다.

근로자에게 관련 규정에 부합한 노동시간 준수 및 휴일 제공으로 근로자 자신과 가족이 건강한 생활수준을 누릴 수 있게 하며, 여성근로자의 모성은 특별한 도움을 받을 권리를 보장하겠습니다.

당사는 근로 중 근로자에게 발생한 문제에 대하여「근로기준법」,「산업재해보상보험법」,「국민건강보험법」등 관련 법령을 준수하여 필요한 조치를 취하며 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임지겠습니다.

2014.  .   .

상    호 :

대    표 :                    □

[별지 제7호 서식]

청렴계약 이행각서(표준안)

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 ○○○○○○에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과  대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 ○○○○○○에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며

ㅇ 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 서울 남산골 한옥마을이 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참여하지 않고

ㅇ 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제및공정거래에관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 계약이행 과정에서 편의를 받아 부실하게 시공 또는 제조한 사실이 드러날 경우에는 ○○○○○○ 및 관련건의 수요기관이 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며

ㅇ 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계공무원에게 금품, 향응등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 ○○○○○○ 및 관련건의 수요기관이 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참가하지 않고

ㅇ 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 ○○○○○○ 및 관련건의 수요기관이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 6개월 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 공무원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부 비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 ○○○○○○의 조치와 관련하여 당사가 ○○○○○○ 을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2014년 12월   일

상    호 :

대    표 :                    □

메타퍼블릭(남산) 총감독 귀하